Title: №п/п
Author: QWE
Last saved by: Савчик Татьяна Валерьевна
Company: ASD

Объект: 1785/13(173)

Наименование утверждающей организации
“ УТВЕРЖДЕНО ”
Всего в сумме | 182265.628  тыс.руб. | |
в том числе: | (с учетом продолжительности строительства) | |
на дату начала разработки сметной документации | 131971.207  тыс.руб. | |
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) | 140764.973  тыс.руб. | |
Возвратные суммы | 294.264  тыс.руб. | |
| « | | » | | | | г.
(ссылка на документ об утверждении) |

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Наименование объекта | РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 330/110/10 КВ « ПОЛОЦКАЯ - 330». 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД О    Код объекта | 1785/13(А-ПС)

Дата начала разработки сметной документации   на 01 октября 2022  г.
Дата начала строительства                                            21  июля 2023 г.
Продолжительность строительства                             40.00 мес.

№
 cметных расчетов
(смет)

Наименование глав, объектов, работ ,средств

Стоимость, тыс.руб.

Общая стоимость,
тыс.руб.

| | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материалы, изделия, конструкции | ОХР и ОПР | Оборудование мебель, инвентарь | Прочие затраты |
| | | в т.ч. зарплата | транспорт | Плановая прибыль | транспорт | | Трудоемкость чел/час

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТАБЛИЦА 1  п.1.3 | Перенесение в натуру габаритов зданий и сооружений (крытая площадка) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                    - | 0.594 | 0.594                                                                                                    -
ТАБЛИЦА 1  п.1.3 | Перенесение в натуру габаритов зданий и сооружений (проходная) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                    - | 0.425 | 0.425                                                                                                    -
ТАБЛИЦА 1  п.1.3 | Перенесение в натуру габаритов зданий и сооружений (ОПУ) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                    - | 0.721 | 0.721                                                                                                    -
ТАБЛИЦА 1  п.1.3 | Перенесение в натуру габаритов зданий и сооружений (ЗВН) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                    - | 0.721 | 0.721                                                                                                    -
ТАБЛИЦА 1  п.1.5 | Обследовательские работы | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                    - | 15.686 | 15.686                                                                                                    -
ТАБЛИЦА 1  п.1.5 | Предпроектные работы (ППД) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                    - | 121.946 | 121.946                                                                                                    -
ТАБЛИЦА 1  п.1.5 | Обследовательские работы (АП) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                    - | 84.917 | 84.917                                                                                                    -
ТАБЛИЦА 1  п.1.5 | Предпроектные работы (АП) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                    - | 9.980 | 9.980                                                                                                    -
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 02.1 | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | - | 2.256                                                                                                                                                                                                        0.635 | -                                                                                                                                                                                                        - | 0.500                                                                                                    0.449 | -                                                                                                    - | - | 3.205                                                                                                    53
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 02.2 | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | - | 5.783                                                                                                                                                                                                        1.629 | -                                                                                                                                                                                                        - | 1.281                                                                                                    1.153 | -                                                                                                    - | - | 8.217                                                                                                    138
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 39.1 | ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКА (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.480 | 2.308                                                                                                                                                                                                        0.553 | -                                                                                                                                                                                                        1.109 | 1.598                                                                                                    1.438 | -                                                                                                    - | 4.991 | 12.924                                                                                                    215
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 40.1 | ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКА (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.418 | 0.079                                                                                                                                                                                                        0.019 | 0.101                                                                                                                                                                                                        0.034 | 0.344                                                                                                    0.309 | -                                                                                                    - | - | 1.285                                                                                                    44
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 40.1-1 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА УДАЛЯЕМУЮ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                    - | 7.474 | 7.474                                                                                                    -
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 41 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА И ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 3.581 | 76.333                                                                                                                                                                                                        20.461 | -                                                                                                                                                                                                        23.100 | 18.907                                                                                                    17.010 | -                                                                                                    - | - | 138.931                                                                                                    2227
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | 5.479 | 86.759                                                                                                                                                                                                        23.297 | 0.101                                                                                                                                                                                                        24.243 | 22.630                                                                                                    20.359 | -                                                                                                                                                                                                        - | 247.455 | 407.026                                                                                                    2677
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ  ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 03.1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 330кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - НОВОСОКОЛЬНИКИ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 5.095 | 6.490                                                                                                                                                                                                        1.685 | -                                                                                                                                                                                                        0.401 | 4.333                                                                                                    4.000 | -                                                                                                    - | 1.588 | 21.907                                                                                                    663
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 04.2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 330кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ЛУКОМЛЬСКАЯ ГРЭС (ОП.№1а-СУЩ.ОП.№2) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 6.360 | 7.731                                                                                                                                                                                                        2.011 | -                                                                                                                                                                                                        0.309 | 5.227                                                                                                    4.773 | -                                                                                                    - | 1.265 | 25.665                                                                                                    816
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 05.3 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 330кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ПОСТАВЫ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 7.808 | 10.112                                                                                                                                                                                                        2.647 | -                                                                                                                                                                                                        0.385 | 6.586                                                                                                    5.817 | -                                                                                                    - | 1.559 | 32.267                                                                                                    1021
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 06.1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ  - МЯСОКОМБИНАТ, СТЕКЛОВОЛОКНО (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 9.462 | 11.144                                                                                                                                                                                                        2.903 | -                                                                                                                                                                                                        0.450 | 7.820                                                                                                    7.344 | -                                                                                                    - | 2.097 | 38.317                                                                                                    1219
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 07.2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ГПП-2 (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 7.137 | 8.504                                                                                                                                                                                                        2.248 | -                                                                                                                                                                                                        0.291 | 6.002                                                                                                    5.800 | -                                                                                                    - | 1.380 | 29.114                                                                                                    927
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 08.2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ГПП-1 (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 4.599 | 4.933                                                                                                                                                                                                        1.284 | -                                                                                                                                                                                                        0.125 | 3.684                                                                                                    3.375 | -                                                                                                    - | 0.534 | 17.250                                                                                                    584
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 09.2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - НАФТАН (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 8.137 | 9.242                                                                                                                                                                                                        2.428 | -                                                                                                                                                                                                        0.298 | 6.704                                                                                                    6.316 | -                                                                                                    - | 1.392 | 32.089                                                                                                    1047
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 10.2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ГЛУБОКОЕ №1 (УЧ.ПС ПОЛОЦКАЯ-330 - ПС ЯЗНО) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 7.254 | 8.707                                                                                                                                                                                                        2.305 | -                                                                                                                                                                                                        0.310 | 6.056                                                                                                    5.896 | -                                                                                                    - | 1.463 | 29.686                                                                                                    944
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 11.2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - БПС ДИСНА (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 6.793 | 7.908                                                                                                                                                                                                        2.110 | -                                                                                                                                                                                                        0.196 | 5.614                                                                                                    5.423 | -                                                                                                    - | 0.902 | 26.836                                                                                                    880
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 12.2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ГЛУБОКОЕ №2 (УЧ.ПС ПОЛОЦКАЯ-330 - ПС КАРАСИ) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 4.989 | 6.830                                                                                                                                                                                                        1.881 | -                                                                                                                                                                                                        0.373 | 4.644                                                                                                    4.235 | -                                                                                                    - | 1.764 | 22.835                                                                                                    684
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 13.1 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ  - РАЙОННАЯ №2 (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 7.304 | 8.717                                                                                                                                                                                                        2.301 | -                                                                                                                                                                                                        0.302 | 6.165                                                                                                    5.940 | -                                                                                                    - | 1.400 | 29.828                                                                                                    950
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 14.2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - НОВОПОЛОЦКАЯ ТЭЦ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 4.366 | 5.438                                                                                                                                                                                                        1.412 | -                                                                                                                                                                                                        0.226 | 3.667                                                                                                    3.505 | -                                                                                                    - | 1.050 | 18.252                                                                                                    568
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 15.2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - РАЙОННАЯ №1 (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 6.974 | 8.526                                                                                                                                                                                                        2.248 | -                                                                                                                                                                                                        0.278 | 5.869                                                                                                    5.677 | -                                                                                                    - | 1.284 | 28.608                                                                                                    912
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 16.1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 330кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - НОВОСОКОЛЬНИКИ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 8.361 | 12.078                                                                                                                                                                                                        3.179 | 201.298                                                                                                                                                                                                        13.104 | 8.185                                                                                                    6.780 | -                                                                                                    - | - | 249.806                                                                                                    1133
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 17.1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 330кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ЛУКОМЛЬСКАЯ ГРЭС (ПОРТАЛ ПС - УГ.1) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 8.228 | 12.839                                                                                                                                                                                                        3.434 | 151.231                                                                                                                                                                                                        10.619 | 8.389                                                                                                    7.009 | -                                                                                                    - | - | 198.315                                                                                                    1148
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 18.2 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 330кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ЛУКОМЛЬСКАЯ ГРЭС (ОП.№1а - СУЩ.ОП.№2) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 11.567 | 17.002                                                                                                                                                                                                        4.525 | 242.984                                                                                                                                                                                                        15.858 | 11.408                                                                                                    9.142 | -                                                                                                    - | - | 307.961                                                                                                    1579
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 19.3 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 330кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ПОСТАВЫ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 19.118 | 28.150                                                                                                                                                                                                        7.450 | 378.330                                                                                                                                                                                                        24.726 | 18.946                                                                                                    15.398 | -                                                                                                    - | - | 484.668                                                                                                    2621
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 20.3 | ПОДВЕСКА ОКГТ НА РЕКОНСТРУКЦИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 330кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ПОСТАВЫ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 2.720 | 3.113                                                                                                                                                                                                        0.676 | 40.630                                                                                                                                                                                                        2.384 | 2.137                                                                                                    1.355 | -                                                                                                    - | - | 52.339                                                                                                    324
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 21.1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ  - МЯСОКОМБИНАТ, СТЕКЛОВОЛОКНО (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 13.141 | 19.125                                                                                                                                                                                                        5.096 | 226.116                                                                                                                                                                                                        16.360 | 13.073                                                                                                    10.714 | -                                                                                                    - | - | 298.529                                                                                                    1808
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 22.2 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ГПП-2 (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 10.717 | 14.880                                                                                                                                                                                                        3.980 | 140.257                                                                                                                                                                                                        10.112 | 10.502                                                                                                    8.814 | -                                                                                                    - | - | 195.282                                                                                                    1456
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 23.2 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ГПП-1 (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 13.943 | 19.671                                                                                                                                                                                                        5.259 | 210.184                                                                                                                                                                                                        15.019 | 13.732                                                                                                    11.869 | -                                                                                                    - | - | 284.418                                                                                                    1903
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 24.2 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - НАФТАН (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 10.092 | 12.510                                                                                                                                                                                                        3.277 | 98.920                                                                                                                                                                                                        7.179 | 9.400                                                                                                    7.254 | -                                                                                                    - | - | 145.355                                                                                                    1331
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 25.2 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ГЛУБОКОЕ №1 (УЧ.ПС ПОЛОЦКАЯ-330 - ПС ЯЗНО) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 6.788 | 8.669                                                                                                                                                                                                        2.265 | 71.280                                                                                                                                                                                                        4.990 | 6.308                                                                                                    4.895 | -                                                                                                    - | - | 102.930                                                                                                    901
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 26.2 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - БПС ДИСНА (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 11.522 | 15.759                                                                                                                                                                                                        4.236 | 147.782                                                                                                                                                                                                        10.513 | 11.187                                                                                                    9.460 | -                                                                                                    - | - | 206.223                                                                                                    1560
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 27.2 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - ГЛУБОКОЕ №2 (УЧ.ПС ПОЛОЦКАЯ-330 - ПС КАРАСИ) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 18.141 | 24.981                                                                                                                                                                                                        6.729 | 231.767                                                                                                                                                                                                        21.908 | 17.599                                                                                                    15.625 | -                                                                                                    - | - | 330.021                                                                                                    2462
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 28.1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ  - РАЙОННАЯ №2 (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 12.073 | 17.248                                                                                                                                                                                                        4.604 | 162.279                                                                                                                                                                                                        11.447 | 11.877                                                                                                    9.961 | -                                                                                                    - | - | 224.885                                                                                                    1651
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 29.2 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - НОВОПОЛОЦКАЯ ТЭЦ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 15.664 | 22.878                                                                                                                                                                                                        6.091 | 223.508                                                                                                                                                                                                        19.632 | 15.634                                                                                                    13.956 | -                                                                                                    - | - | 311.272                                                                                                    2148
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 30.2 | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - РАЙОННАЯ №1 (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 12.061 | 16.022                                                                                                                                                                                                        4.245 | 158.664                                                                                                                                                                                                        11.244 | 11.707                                                                                                    9.913 | -                                                                                                    - | - | 219.611                                                                                                    1620
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 31.2 | ПЕРЕПОДВЕСКА ОКГТ НА РЕКОНСТРУИРУЕМОМ УЧАСТКЕ ВЛ 110кВ ПОЛОЦКАЯ 330 - РАЙОННАЯ №1 (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 4.766 | 5.179                                                                                                                                                                                                        1.126 | 21.128                                                                                                                                                                                                        1.239 | 3.962                                                                                                    2.372 | -                                                                                                    - | - | 38.646                                                                                                    572
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 32.1 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШЛЕЙФА ПРИ ПОДВЕСКЕ ВЧ ЗАГРАДИТЕЛЯ НА ВЛ 110кВ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.508 | 0.512                                                                                                                                                                                                        0.122 | 7.513                                                                                                                                                                                                        0.436 | 0.381                                                                                                    0.264 | -                                                                                                    - | 0.009 | 9.623                                                                                                    61
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 32.2 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШЛЕЙФА ПРИ ПОДВЕСКЕ ВЧ ЗАГРАДИТЕЛЯ НА ВЛ 110кВ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.230 | 1.313                                                                                                                                                                                                        0.316 | 9.204                                                                                                                                                                                                        0.542 | 0.926                                                                                                    0.636 | -                                                                                                    - | 0.012 | 13.863                                                                                                    155
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 36.1 | СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ 110 КВ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 4.159 | 3.713                                                                                                                                                                                                        1.206 | 88.314                                                                                                                                                                                                        8.042 | 3.746                                                                                                    3.064 | -                                                                                                    - | - | 111.038                                                                                                    562
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 37.1 | КЛ 10 КВ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 8.059 | 8.352                                                                                                                                                                                                        2.577 | 151.530                                                                                                                                                                                                        10.208 | 6.721                                                                                                    4.920 | -                                                                                                    - | - | 189.790                                                                                                    1063
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 38.1 | ВЛП 10 КВ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.644 | 0.505                                                                                                                                                                                                        0.139 | 3.504                                                                                                                                                                                                        0.278 | 0.595                                                                                                    0.521 | -                                                                                                    - | 0.077 | 6.124                                                                                                    82
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 42.1 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ ОРУ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 95.922 | 131.844                                                                                                                                                                                                        35.374 | 0.722                                                                                                                                                                                                        5.782 | 90.365                                                                                                    74.832 | -                                                                                                    - | 23.360 | 422.827                                                                                                    12902
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 42.2 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ ОРУ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 98.917 | 149.845                                                                                                                                                                                                        38.694 | 0.096                                                                                                                                                                                                        9.436 | 99.334                                                                                                    86.219 | -                                                                                                    - | 38.751 | 482.598                                                                                                    13574
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 42.3 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ ОРУ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 164.396 | 230.882                                                                                                                                                                                                        61.285 | 0.723                                                                                                                                                                                                        14.357 | 157.357                                                                                                    127.129 | -                                                                                                    - | 58.627 | 753.471                                                                                                    22338
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 43.1 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ ОПУ, ЗРУ 10 КВ И КАМЕРЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДВИЖЕК (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.312 | 0.233                                                                                                                                                                                                        0.056 | -                                                                                                                                                                                                        - | 0.219                                                                                                    0.149 | -                                                                                                    - | - | 0.913                                                                                                    36
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 43.1-1 | ДЕМОНТАЖ КАМЕРЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДВИЖЕК ПОЗ. 28 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.360 | 5.538                                                                                                                                                                                                        0.955 | -                                                                                                                                                                                                        0.476 | 0.993                                                                                                    0.870 | -                                                                                                    - | 1.952 | 10.189                                                                                                    117
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 43.2 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ ОПУ, ЗРУ 10 КВ И КАМЕРЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДВИЖЕК (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.469 | 0.349                                                                                                                                                                                                        0.083 | -                                                                                                                                                                                                        - | 0.329                                                                                                    0.224 | -                                                                                                    - | - | 1.371                                                                                                    54
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 43.3 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ ОПУ, ЗРУ 10 КВ И КАМЕРЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДВИЖЕК (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.640 | 1.223                                                                                                                                                                                                        0.292 | -                                                                                                                                                                                                        - | 1.151                                                                                                    0.783 | -                                                                                                    - | - | 4.797                                                                                                    188
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 43.3-1 | ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ ОПУ-1,2,3 ПОЗ. 30 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 25.666 | 170.953                                                                                                                                                                                                        29.045 | -                                                                                                                                                                                                        15.478 | 38.309                                                                                                    31.237 | -                                                                                                    - | 60.891 | 342.534                                                                                                    5066
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 43.3-2 | ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ ЗРУ 10 КВ ПОЗ. 33 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.720 | 21.891                                                                                                                                                                                                        3.708 | -                                                                                                                                                                                                        15.124 | 3.896                                                                                                    3.258 | -                                                                                                    - | 6.402 | 52.291                                                                                                    484
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 46.1 | ОРУ 330 КВ ПОЗ. 2 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 883.989 | 791.659                                                                                                                                                                                                        186.179 | 6509.259                                                                                                                                                                                                        479.148 | 727.535                                                                                                    560.518 | 34324.509                                                                                                    686.491 | 4.965 | 44968.073                                                                                                    106599
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 46.2 | ОРУ 330 КВ ПОЗ. 2 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 2.794 | 2.994                                                                                                                                                                                                        1.105 | 63.184                                                                                                                                                                                                        3.637 | 2.554                                                                                                    1.580 | -                                                                                                    - | - | 76.743                                                                                                    393
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 46.3 | ОРУ 330 КВ ПОЗ. 2 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 293.787 | 253.668                                                                                                                                                                                                        63.264 | 2308.623                                                                                                                                                                                                        167.197 | 247.364                                                                                                    187.787 | 3484.089                                                                                                    69.682 | 1.961 | 7014.158                                                                                                    35726
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 47.1 | ОРУ 110 КВ ПОЗ. 1 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 355.446 | 277.781                                                                                                                                                                                                        68.203 | 2660.645                                                                                                                                                                                                        170.804 | 286.689                                                                                                    206.100 | 3890.430                                                                                                    77.808 | 2.154 | 7927.857                                                                                                    42132
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 47.2 | ОРУ 110 КВ ПОЗ. 1 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 449.727 | 330.376                                                                                                                                                                                                        83.923 | 3623.326                                                                                                                                                                                                        238.785 | 362.410                                                                                                    258.638 | 4698.931                                                                                                    93.978 | 2.451 | 10058.622                                                                                                    53086
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 47.3 | ОРУ 110 КВ ПОЗ. 1 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 81.847 | 62.697                                                                                                                                                                                                        15.616 | 1330.660                                                                                                                                                                                                        86.728 | 67.757                                                                                                    51.233 | -                                                                                                    - | 0.439 | 1681.361                                                                                                    9814
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 48.1 | ОПУ ПОЗ. 4 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 273.297 | 122.194                                                                                                                                                                                                        30.384 | 1837.792                                                                                                                                                                                                        215.440 | 223.213                                                                                                    195.822 | 1383.472                                                                                                    27.669 | - | 4278.899                                                                                                    32230
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 49.1 | ЗРУ 10 КВ ПОЗ. 5 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 16.720 | 15.438                                                                                                                                                                                                        3.639 | 87.301                                                                                                                                                                                                        6.362 | 12.885                                                                                                    10.372 | 1045.240                                                                                                    20.905 | - | 1215.223                                                                                                    2007
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 50.1 | ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ПОЗ. 12 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.955 | 0.617                                                                                                                                                                                                        0.189 | 2.319                                                                                                                                                                                                        0.224 | 0.780                                                                                                    0.532 | -                                                                                                    - | - | 5.427                                                                                                    112
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 56.1 | РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 22.838 | 14.154                                                                                                                                                                                                        3.393 | 28.860                                                                                                                                                                                                        2.113 | 15.622                                                                                                    10.632 | 9420.465                                                                                                    188.409 | - | 9703.093                                                                                                    2562
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 56.2 | РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 10.085 | 5.914                                                                                                                                                                                                        1.429 | 12.752                                                                                                                                                                                                        0.925 | 6.854                                                                                                    4.668 | -                                                                                                    - | - | 41.198                                                                                                    1122
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 56.3 | РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 18.210 | 5.472                                                                                                                                                                                                        1.298 | 48.307                                                                                                                                                                                                        2.935 | 9.610                                                                                                    7.594 | -                                                                                                    - | - | 92.128                                                                                                    2053
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 57.1 | АСУ ТП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 12.846 | 3.883                                                                                                                                                                                                        0.612 | 46.105                                                                                                                                                                                                        2.741 | 6.711                                                                                                    5.221 | 3695.176                                                                                                    73.904 | - | 3846.587                                                                                                    1329
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 57.3 | АСУ ТП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.745 | 0.350                                                                                                                                                                                                        0.049 | 4.110                                                                                                                                                                                                        0.237 | 0.420                                                                                                    0.305 | -                                                                                                    - | - | 6.167                                                                                                    76
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 58.3 | АСУ ТП (ПОЛОЦКИЕ ЭС) (ЗОНА 1) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.845 | 0.113                                                                                                                                                                                                        0.031 | 1.690                                                                                                                                                                                                        0.081 | 0.461                                                                                                    0.347 | -                                                                                                    - | - | 3.537                                                                                                    87
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 59.1 | АСКУЭ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 3.655 | 1.842                                                                                                                                                                                                        0.332 | 6.839                                                                                                                                                                                                        0.430 | 2.195                                                                                                    1.577 | 650.248                                                                                                    13.005 | - | 679.791                                                                                                    387
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 59.2 | АСКУЭ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.032 | 0.519                                                                                                                                                                                                        0.124 | 1.499                                                                                                                                                                                                        0.101 | 0.672                                                                                                    0.465 | -                                                                                                    - | - | 4.288                                                                                                    112
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 59.3 | АСКУЭ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.838 | 0.119                                                                                                                                                                                                        0.029 | 6.136                                                                                                                                                                                                        0.357 | 0.508                                                                                                    0.351 | -                                                                                                    - | - | 8.309                                                                                                    85
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 62.1 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА СМЕЖНЫХ ОБЪЕКТАХ (ЗОНА 2) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.396 | 0.287                                                                                                                                                                                                        0.112 | 3.699                                                                                                                                                                                                        0.215 | 0.334                                                                                                    0.205 | -                                                                                                    - | - | 5.136                                                                                                    51
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 62.2 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА СМЕЖНЫХ ОБЪЕКТАХ (ЗОНА 2) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 19.487 | 7.238                                                                                                                                                                                                        2.438 | 94.101                                                                                                                                                                                                        6.190 | 14.944                                                                                                    9.784 | 78.500                                                                                                    1.570 | - | 231.814                                                                                                    2211
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 63.1 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СМЕЖНЫХ ОБЪЕКТАХ (ЗОНА 1) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 20.848 | 14.853                                                                                                                                                                                                        3.503 | 141.174                                                                                                                                                                                                        7.322 | 16.208                                                                                                    12.210 | 47.185                                                                                                    0.944 | 0.285 | 261.029                                                                                                    2477
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 63.2 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА СМЕЖНЫХ ОБЪЕКТАХ (ЗОНА 1) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 3.494 | 0.718                                                                                                                                                                                                        0.215 | 9.965                                                                                                                                                                                                        0.485 | 2.435                                                                                                    1.541 | -                                                                                                    - | - | 18.638                                                                                                    370
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 91.3 | ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛС ОТ УДАРОВ МОЛНИИ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.295 | 0.015                                                                                                                                                                                                        0.003 | 0.273                                                                                                                                                                                                        0.018 | 0.232                                                                                                    0.208 | -                                                                                                    - | - | 1.041                                                                                                    34
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 3143.358 | 2994.440                                                                                                                                                                                                        733.557 | 21796.583                                                                                                                                                                                                        1672.912 | 2659.132                                                                                                    2074.414 | 62718.245                                                                                                                                                                                                        1254.365 | 220.014 | 98533.463                                                                                                    387169
ГЛАВА 3. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 44.1 | ДЕМОНТАЖ ОТКРЫТОГО СКЛАДА МАСЛА  ПОЗ. 22 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.082 | 4.033                                                                                                                                                                                                        0.743 | -                                                                                                                                                                                                        0.359 | 1.177                                                                                                    1.075 | -                                                                                                    - | 1.248 | 8.974                                                                                                    176
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 44.1-1 | ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ НАСОСНОЙ №1 ПОЗ. 23 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.411 | 0.261                                                                                                                                                                                                        0.100 | -                                                                                                                                                                                                        - | 0.304                                                                                                    0.207 | -                                                                                                    - | - | 1.183                                                                                                    49
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 44.1-2 | ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ НАСОСНОЙ №2 ПОЗ. 24 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.426 | 0.282                                                                                                                                                                                                        0.111 | -                                                                                                                                                                                                        - | 0.320                                                                                                    0.218 | -                                                                                                    - | - | 1.246                                                                                                    52
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 44.1-3 | ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ КОМПРЕССОРНОЙ ПОЗ. 27 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.235 | 0.743                                                                                                                                                                                                        0.134 | -                                                                                                                                                                                                        - | 0.907                                                                                                    0.767 | -                                                                                                    - | - | 3.652                                                                                                    137
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 44.2 | ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ КОМПРЕССОРНОЙ ПОЗ. 27 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.439 | 0.444                                                                                                                                                                                                        0.085 | -                                                                                                                                                                                                        - | 0.315                                                                                                    0.280 | -                                                                                                    - | - | 1.478                                                                                                    52
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 44.3 | ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ ЗВН ПОЗ. 21 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.734 | 32.005                                                                                                                                                                                                        5.212 | 0.203                                                                                                                                                                                                        4.049 | 4.587                                                                                                    4.084 | -                                                                                                    - | 12.687 | 58.349                                                                                                    509
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 44.3-1 | ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ КОМПРЕССОРНОЙ ПОЗ. 27 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 9.330 | 42.741                                                                                                                                                                                                        6.937 | 0.288                                                                                                                                                                                                        6.026 | 9.650                                                                                                    8.826 | -                                                                                                    - | 19.082 | 95.943                                                                                                    1544
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 44.3-2 | ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ ПРОХОДНОЙ ПОЗ. 29 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.139 | 17.628                                                                                                                                                                                                        2.836 | -                                                                                                                                                                                                        1.669 | 3.078                                                                                                    2.736 | -                                                                                                    - | 6.944 | 33.194                                                                                                    358
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 51.3 | ПРОХОДНАЯ ПОЗ. 7 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 28.001 | 13.687                                                                                                                                                                                                        3.591 | 235.792                                                                                                                                                                                                        19.152 | 23.130                                                                                                    19.931 | 4.092                                                                                                    0.082 | - | 343.867                                                                                                    3319
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 52.3 | ЗВН ПОЗ. 6 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 175.130 | 83.359                                                                                                                                                                                                        20.768 | 974.593                                                                                                                                                                                                        94.004 | 145.195                                                                                                    128.653 | 1596.025                                                                                                    31.919 | - | 3228.878                                                                                                    20710
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 53.3 | СКЛАД (КРЫТАЯ ПЛОЩАДКА) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 65.167 | 66.330                                                                                                                                                                                                        14.634 | 488.570                                                                                                                                                                                                        84.650 | 56.127                                                                                                    53.291 | 26.188                                                                                                    0.524 | - | 840.847                                                                                                    8249
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 54.1 | АВАРИЙНЫЕ МАСЛООТВОДЫ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 20.347 | 29.423                                                                                                                                                                                                        7.622 | 53.024                                                                                                                                                                                                        6.028 | 21.995                                                                                                    19.787 | -                                                                                                    - | 1.091 | 151.695                                                                                                    2863
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 55.1 | МАСЛОСБОРНИК ПОЗ. 8 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 10.056 | 14.531                                                                                                                                                                                                        3.962 | 52.886                                                                                                                                                                                                        7.892 | 11.019                                                                                                    9.917 | -                                                                                                    - | - | 106.301                                                                                                    1483
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 55.1-1 | РАЗБОРКА МАСЛОСБОРНИКА ОТКРЫТОГО ТИПА ПОЗ. 31 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.315 | 1.169                                                                                                                                                                                                        0.286 | -                                                                                                                                                                                                        0.052 | 0.429                                                                                                    0.386 | -                                                                                                    - | 0.212 | 2.563                                                                                                    59
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 55.1-2 | РАЗБОРКА МАСЛОСБОРНИКА №1 ПОЗ. 36 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 6.952 | 13.114                                                                                                                                                                                                        4.610 | 0.318                                                                                                                                                                                                        1.300 | 9.092                                                                                                    8.180 | -                                                                                                    - | 3.642 | 42.598                                                                                                    1215
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 55.1-3 | РАЗБОРКА МАСЛОСБОРНИКА №2 ПОЗ. 37 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 5.861 | 13.646                                                                                                                                                                                                        4.791 | 0.472                                                                                                                                                                                                        0.846 | 8.377                                                                                                    7.537 | -                                                                                                    - | 2.480 | 39.219                                                                                                    1069
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3 | 326.625 | 333.396                                                                                                                                                                                                        76.422 | 1806.146                                                                                                                                                                                                        226.027 | 295.702                                                                                                    265.875 | 1626.305                                                                                                                                                                                                        32.525 | 47.386 | 4959.987                                                                                                    41844
ГЛАВА 5. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 35.2 | ПРОКЛАДКА ВОК НА ПС ПОЛОЦКАЯ-330. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАХОДА ВОЛС ПС ПОЛОЦКАЯ 330 - ПС 110 кВ РАЙОННАЯ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.334 | 0.742                                                                                                                                                                                                        0.139 | 3.782                                                                                                                                                                                                        0.221 | 0.857                                                                                                    0.619 | 4.062                                                                                                    0.081 | - | 11.698                                                                                                    147
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 35.3 | ПРОКЛАДКА ВОК НА ПС ПОЛОЦКАЯ-330. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАХОДА ВОЛС ПС ПОЛОЦКАЯ 330 - ПС 330 кВ ПОСТАВЫ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.201 | 0.770                                                                                                                                                                                                        0.158 | 6.471                                                                                                                                                                                                        0.372 | 0.794                                                                                                    0.564 | -                                                                                                    - | - | 10.172                                                                                                    133
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 45.3 | ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ УЗЛА СВЯЗИ ПОЗ. 35 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.604 | 43.256                                                                                                                                                                                                        7.055 | -                                                                                                                                                                                                        15.180 | 6.657                                                                                                    5.883 | -                                                                                                    - | 16.612 | 89.192                                                                                                    761
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 64.3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДОК (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.143 | 4.083                                                                                                                                                                                                        1.152 | 20.905                                                                                                                                                                                                        13.480 | 1.805                                                                                                    1.624 | -                                                                                                    - | - | 43.040                                                                                                    228
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 65 | ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 11.077 | 17.665                                                                                                                                                                                                        4.745 | -                                                                                                                                                                                                        20.976 | 12.443                                                                                                    11.195 | -                                                                                                    - | 93.598 | 166.954                                                                                                    1572
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 65.3 | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ АВТОДОРОГА (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 52.005 | 66.530                                                                                                                                                                                                        17.439 | 388.549                                                                                                                                                                                                        202.583 | 54.611                                                                                                    49.132 | -                                                                                                    - | - | 813.410                                                                                                    7483
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 66.1 | ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.685 | 2.332                                                                                                                                                                                                        0.623 | 2.998                                                                                                                                                                                                        12.583 | 1.029                                                                                                    0.925 | -                                                                                                    - | - | 20.552                                                                                                    135
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 66.3 | ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 16.084 | 24.809                                                                                                                                                                                                        6.735 | 28.373                                                                                                                                                                                                        43.262 | 17.944                                                                                                    16.145 | -                                                                                                    - | - | 146.617                                                                                                    2477
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 66.3-1 | ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОДОРОГИ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.086 | 0.149                                                                                                                                                                                                        0.049 | -                                                                                                                                                                                                        0.110 | 0.106                                                                                                    0.096 | -                                                                                                    - | 0.472 | 1.019                                                                                                    14
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 67.1 | ВНУТРИОБЪЕКТНАЯ СВЯЗЬ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 15.086 | 2.937                                                                                                                                                                                                        1.597 | 31.983                                                                                                                                                                                                        1.906 | 9.460                                                                                                    6.831 | -                                                                                                    - | - | 68.203                                                                                                    1714
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 67.3 | ВНУТРИОБЪЕКТНАЯ СВЯЗЬ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 16.970 | 2.619                                                                                                                                                                                                        0.789 | 53.388                                                                                                                                                                                                        3.122 | 10.546                                                                                                    7.696 | -                                                                                                    - | - | 94.341                                                                                                    1825
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 68.1 | ВНУТРИОБЪЕКТНАЯ СВЯЗЬ НА СМЕЖНЫХ ОБЪЕКТАХ (ЗОНА 1) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.288 | 0.069                                                                                                                                                                                                        0.015 | 0.914                                                                                                                                                                                                        0.043 | 0.834                                                                                                    0.497 | -                                                                                                    - | - | 3.645                                                                                                    129
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 69.1 | РАДИОРЕЛЕЙНАЯ И РАДИОСВЯЗЬ НА ПС 330 КВ ПОЛОЦКАЯ И УШАЧСКОМ РЭС (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 27.746 | 17.236                                                                                                                                                                                                        4.232 | 208.507                                                                                                                                                                                                        15.761 | 20.300                                                                                                    18.140 | -                                                                                                    - | 23.500 | 331.190                                                                                                    3268
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 69.3 | РАЗБОРКА РАДИОМАЧТЫ ПОЗ. 34 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 2.889 | 6.448                                                                                                                                                                                                        1.516 | -                                                                                                                                                                                                        0.184 | 3.102                                                                                                    3.060 | -                                                                                                    - | 0.755 | 16.438                                                                                                    442
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 70.1 | РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СВЯЗЬ НА ПОЛОЦКИХ ЭС (ЗОНА 1) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.271 | 0.027                                                                                                                                                                                                        0.010 | 0.001                                                                                                                                                                                                        - | 0.140                                                                                                    0.105 | -                                                                                                    - | - | 0.544                                                                                                    28
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 71.1 | СРЕДСТВА СВЯЗИ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 8.621 | 1.177                                                                                                                                                                                                        0.167 | 27.382                                                                                                                                                                                                        1.582 | 3.998                                                                                                    3.352 | -                                                                                                    - | - | 46.112                                                                                                    835
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 71.3 | СРЕДСТВА СВЯЗИ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 12.347 | 1.353                                                                                                                                                                                                        0.181 | 4.084                                                                                                                                                                                                        0.239 | 5.307                                                                                                    4.738 | -                                                                                                    - | - | 28.068                                                                                                    1159
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 72.3 | СРЕДСТВА СВЯЗИ НА ПС 110 КВ РАЙОННАЯ (ЗОНА 1) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.220 | 0.127                                                                                                                                                                                                        0.002 | 0.195                                                                                                                                                                                                        0.009 | 0.107                                                                                                    0.083 | -                                                                                                    - | - | 0.741                                                                                                    19
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 73.1 | ВЧ СВЯЗЬ ПО ПРОВОДАМ ВЛ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 7.080 | 5.894                                                                                                                                                                                                        1.715 | 5.939                                                                                                                                                                                                        0.375 | 5.918                                                                                                    3.476 | -                                                                                                    - | - | 28.682                                                                                                    870
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 73.2 | ВЧ СВЯЗЬ ПО ПРОВОДАМ ВЛ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 13.412 | 10.626                                                                                                                                                                                                        2.983 | 16.012                                                                                                                                                                                                        0.972 | 11.117                                                                                                    6.435 | -                                                                                                    - | - | 58.574                                                                                                    1628
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 73.3 | ВЧ СВЯЗЬ ПО ПРОВОДАМ ВЛ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 3.017 | 2.751                                                                                                                                                                                                        0.793 | 3.381                                                                                                                                                                                                        0.204 | 2.574                                                                                                    1.504 | -                                                                                                    - | - | 13.431                                                                                                    376
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 74.1 | ВЧ СВЯЗЬ ПО ПРОВОДАМ ВЛ НА СМЕЖНЫХ ОБЪЕКТАХ (ЗОНА 2) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 2.175 | 0.880                                                                                                                                                                                                        0.249 | 1.900                                                                                                                                                                                                        0.185 | 1.779                                                                                                    1.224 | -                                                                                                    - | 0.023 | 8.166                                                                                                    254
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 74.2 | ВЧ СВЯЗЬ ПО ПРОВОДАМ ВЛ НА СМЕЖНЫХ ОБЪЕКТАХ (ЗОНА 2) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 21.299 | 15.761                                                                                                                                                                                                        4.505 | 26.399                                                                                                                                                                                                        2.463 | 19.451                                                                                                    13.216 | -                                                                                                    - | 0.434 | 99.023                                                                                                    2636
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 75.1 | ВЧ СВЯЗЬ ПО ПРОВОДАМ ВЛ НА СМЕЖНЫХ ОБЪЕКТАХ (ЗОНА 1) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.448 | 0.413                                                                                                                                                                                                        0.109 | 0.016                                                                                                                                                                                                        0.006 | 0.359                                                                                                    0.256 | -                                                                                                    - | 0.023 | 1.521                                                                                                    56
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 75.2 | ВЧ СВЯЗЬ ПО ПРОВОДАМ ВЛ НА СМЕЖНЫХ ОБЪЕКТАХ (ЗОНА 1) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.889 | 0.894                                                                                                                                                                                                        0.262 | 2.353                                                                                                                                                                                                        0.140 | 1.544                                                                                                    1.275 | -                                                                                                    - | - | 8.095                                                                                                    224
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 76.1 | КОМПЛЕКС СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 33.442 | 6.354                                                                                                                                                                                                        1.993 | 42.868                                                                                                                                                                                                        2.564 | 20.272                                                                                                    14.037 | 451.726                                                                                                    9.035 | - | 580.298                                                                                                    3523
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 76.2 | КОМПЛЕКС СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.687 | 0.884                                                                                                                                                                                                        0.058 | 0.839                                                                                                                                                                                                        0.047 | 1.073                                                                                                    0.688 | -                                                                                                    - | - | 5.218                                                                                                    160
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 76.3 | КОМПЛЕКС СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 45.930 | 16.868                                                                                                                                                                                                        5.599 | 159.479                                                                                                                                                                                                        9.229 | 29.830                                                                                                    20.649 | -                                                                                                    - | - | 281.985                                                                                                    5068
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 77.1 | КОМПЛЕКС СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОЛОЦКИХ ЭС (ЗОНА 1) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.041 | 0.012                                                                                                                                                                                                        0.005 | 0.002                                                                                                                                                                                                        - | 0.018                                                                                                    0.017 | -                                                                                                    - | - | 0.090                                                                                                    4
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 77.3 | КОМПЛЕКС СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОЛОЦКИХ ЭС (ЗОНА 1) (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.098 | 0.022                                                                                                                                                                                                        0.006 | 0.157                                                                                                                                                                                                        0.008 | 0.054                                                                                                    0.040 | -                                                                                                    - | - | 0.379                                                                                                    10
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 86.1 | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | 6271.430                                                                                                    125.429 | - | 6396.859                                                                                                    -
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 92.1 | ДООБОРУДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УПАТС (ГПО "БЕЛЭНЕРГО") (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.183 | 0.006                                                                                                                                                                                                        0.001 | 0.066                                                                                                                                                                                                        0.004 | 0.121                                                                                                    0.070 | -                                                                                                    - | - | 0.450                                                                                                    18
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5 | 301.358 | 253.694                                                                                                                                                                                                        64.882 | 1036.943                                                                                                                                                                                                        347.810 | 244.150                                                                                                    193.572 | 6727.218                                                                                                                                                                                                        134.545 | 135.417 | 9374.707                                                                                                    37196
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,КАНАЛИЗАЦИИ,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 78.1 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 31.953 | 39.957                                                                                                                                                                                                        10.547 | 80.392                                                                                                                                                                                                        9.217 | 33.322                                                                                                    29.938 | 2.200                                                                                                    0.044 | - | 227.023                                                                                                    4476
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 78.1-1 | РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 25.817 | 79.607                                                                                                                                                                                                        25.593 | 0.012                                                                                                                                                                                                        1.372 | 40.429                                                                                                    36.373 | -                                                                                                    - | 5.637 | 189.247                                                                                                    5280
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 79.1 | РАЗБОРКА НАСОСНОЙ №1 ПОЗ. 23 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.659 | 15.620                                                                                                                                                                                                        2.544 | 0.182                                                                                                                                                                                                        2.614 | 2.399                                                                                                    2.161 | -                                                                                                    - | 6.004 | 29.639                                                                                                    278
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 79.1-1 | РАЗБОРКА НАСОСНОЙ №2 ПОЗ. 24 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.116 | 13.554                                                                                                                                                                                                        2.231 | 0.568                                                                                                                                                                                                        5.374 | 2.670                                                                                                    2.350 | -                                                                                                    - | 10.741 | 36.373                                                                                                    308
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 79.1-2 | РАЗБОРКА ПОЖАРНОГО РЕЗЕРВУАРА V=100 М3 ПОЗ. 25 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.706 | 16.304                                                                                                                                                                                                        4.229 | -                                                                                                                                                                                                        2.486 | 3.875                                                                                                    3.491 | -                                                                                                    - | 7.553 | 34.415                                                                                                    438
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 79.1-3 | РАЗБОРКА ПОЖАРНОГО РЕЗЕРВУАРА V=150 М3 ПОЗ. 26 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.520 | 36.494                                                                                                                                                                                                        9.468 | 0.001                                                                                                                                                                                                        5.580 | 8.632                                                                                                    7.772 | -                                                                                                    - | 16.886 | 76.885                                                                                                    974
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 79.1-4 | РАЗБОРКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ ПОЗ. 32 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.104 | 5.338                                                                                                                                                                                                        0.895 | -                                                                                                                                                                                                        0.477 | 0.781                                                                                                    0.706 | -                                                                                                    - | 1.952 | 9.358                                                                                                    86
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 79.3 | РАЗБОРКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ ПОЗ. 32 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.106 | 0.066                                                                                                                                                                                                        0.027 | -                                                                                                                                                                                                        - | 0.079                                                                                                    0.054 | -                                                                                                    - | - | 0.305                                                                                                    13
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 80.1 | НАСОСНАЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ПРОЕКТ.) ПОЗ. 17 ПО ГП. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ (ПРОЕКТ.) ПОЗ. 16 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 18.288 | 22.210                                                                                                                                                                                                        6.708 | 34.943                                                                                                                                                                                                        6.406 | 19.025                                                                                                    17.158 | 224.393                                                                                                    4.488 | - | 346.911                                                                                                    2610
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 80.1-1 | КНС БЫТОВОГО СТОКА (ПРОЕКТ.)  ПОЗ. 18 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 6.512 | 9.095                                                                                                                                                                                                        2.856 | 5.178                                                                                                                                                                                                        0.704 | 6.352                                                                                                    5.721 | 21.990                                                                                                    0.440 | - | 55.992                                                                                                    982
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 80.3 | НАСОСНАЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ПРОЕКТ.) ПОЗ. 17 ПО ГП. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ (ПРОЕКТ.) ПОЗ. 16 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 8.614 | 7.227                                                                                                                                                                                                        2.346 | 172.039                                                                                                                                                                                                        9.872 | 7.749                                                                                                    6.373 | -                                                                                                    - | - | 211.874                                                                                                    1169
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 82.1 | ДРЕНАЖНЫЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 2.925 | 12.751                                                                                                                                                                                                        4.594 | 31.047                                                                                                                                                                                                        72.151 | 4.280                                                                                                    3.822 | 17.007                                                                                                    0.340 | - | 144.323                                                                                                    760
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 87.3 | СКВАЖИНА (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ ТАМПОНАЖ) ПОЗ. 36 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 25.010 | 79.031                                                                                                                                                                                                        13.628 | 53.049                                                                                                                                                                                                        3.950 | 22.594                                                                                                    20.623 | -                                                                                                    - | - | 204.257                                                                                                    3656
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 89.3 | БЛОЧНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ №1 ПОЗ. 15.1 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.827 | 0.472                                                                                                                                                                                                        0.160 | 3.232                                                                                                                                                                                                        0.519 | 0.776                                                                                                    0.698 | -                                                                                                    - | - | 6.524                                                                                                    111
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 90.3 | БЛОЧНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ №2 ПОЗ. 15.2 ПО ГП (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.358 | 0.110                                                                                                                                                                                                        0.033 | 1.869                                                                                                                                                                                                        0.440 | 0.307                                                                                                    0.277 | -                                                                                                    - | - | 3.361                                                                                                    43
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6 | 124.515 | 337.836                                                                                                                                                                                                        85.859 | 382.512                                                                                                                                                                                                        121.162 | 153.270                                                                                                    137.517 | 265.590                                                                                                                                                                                                        5.312 | 48.773 | 1576.487                                                                                                    21184
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 83.1 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 21.705 | 7.863                                                                                                                                                                                                        1.838 | 1.243                                                                                                                                                                                                        0.316 | 18.514                                                                                                    16.657 | -                                                                                                    - | - | 66.298                                                                                                    2571
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 83.3 | БЛАГОУСТРОЙСТВО (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 448.683 | 118.522                                                                                                                                                                                                        25.351 | 24.018                                                                                                                                                                                                        16.208 | 372.781                                                                                                    335.379 | -                                                                                                    - | - | 1315.591                                                                                                    51948
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 84.3 | ОГРАЖДЕНИЕ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 109.936 | 49.904                                                                                                                                                                                                        12.033 | 699.654                                                                                                                                                                                                        90.844 | 93.540                                                                                                    85.686 | 200.000                                                                                                    4.000 | 1.746 | 1335.310                                                                                                    12643
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 85.1 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 33.442 | 17.657                                                                                                                                                                                                        5.456 | 257.624                                                                                                                                                                                                        15.042 | 24.599                                                                                                    18.116 | -                                                                                                    - | - | 366.480                                                                                                    3931
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 85.2 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 3.480 | 1.752                                                                                                                                                                                                        0.625 | 15.884                                                                                                                                                                                                        0.940 | 2.510                                                                                                    1.766 | -                                                                                                    - | - | 26.332                                                                                                    413
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 85.3 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 19.683 | 12.092                                                                                                                                                                                                        3.343 | 90.951                                                                                                                                                                                                        5.358 | 14.550                                                                                                    10.773 | -                                                                                                    - | - | 153.407                                                                                                    2356
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 | 636.929 | 207.790                                                                                                                                                                                                        48.646 | 1089.374                                                                                                                                                                                                        128.708 | 526.494                                                                                                    468.377 | 200.000                                                                                                                                                                                                        4.000 | 1.746 | 3263.418                                                                                                    73862
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 4538.264 | 4213.915                                                                                                                                                                                                        1032.663 | 26111.659                                                                                                                                                                                                        2520.862 | 3901.378                                                                                                    3160.114 | 71537.358                                                                                                                                                                                                        1430.747 | 700.791 | 118115.088                                                                                                    563932
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | | | 143.359 | | | | 143.359
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 34.2 | ВРЕМЕННАЯ СХЕМА ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 1.038 | 0.201                                                                                                                                                                                                        0.040 | 0.149                                                                                                                                                                                                        0.019 | 0.848                                                                                                    0.763 | -                                                                                                                                                                                                        - | - | 3.018                                                                                                    117
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 34.3 | ВРЕМЕННАЯ СХЕМА ОДД НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (заключение гос.экспертизы от 30.05.2024 №201-17/24) | 0.944 | 0.183                                                                                                                                                                                                        0.036 | 0.133                                                                                                                                                                                                        0.016 | 0.771                                                                                                    0.693 | -                                                                                                                                                                                                        - | - | 2.740                                                                                                    107
Пункт 29 Инструкции | Временные здания и сооружения 0.8*0.93*9.10% | 94.294 | 56.576                                                                                                                                                                                                        11.315 | 226.304                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | - | 377.174                                                                                                    25384
коэффициент перехода к трудоемкости для средств на временные здания и сооружения  67.3
| в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений 0.15 | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | - | 56.576                                                                                                    -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 96.276 | 56.960                                                                                                                                                                                                        11.391 | 226.586                                                                                                                                                                                                        0.035 | 1.619                                                                                                    1.456 | -                                                                                                                                                                                                        - | - | 382.932                                                                                                    25608
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 4634.540 | 4270.875                                                                                                                                                                                                        1044.054 | 26338.245                                                                                                                                                                                                        2520.897 | 3902.997                                                                                                    3161.570 | 71537.358                                                                                                                                                                                                        1430.747 | 700.791 | 118498.020                                                                                                    589540
| Возвратные суммы | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | - | 199.935                                                                                                    -
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
Подпункт 30.1   Инструкции | Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время 2.30342%-об.см.,40.1-1,41,42.1,42.2,42.3,43.1,43.1-1,43.2,43.3,43.3-1,43.3-2,44.1,44.1-1,44.1-2,44.1-3,44.2,44.3,44.3-1,44.3-2,45.3,46.1,46.2,46.3,47.1,47.2,47.3,48.1,49.1,50.1,51.3,52.3,53.3,54.1,55.1,55.1-1,55.1-2,55.1-3,56.1,56.2,56.3,57.1,57.3,58.3,59.1,59.2,59.3,62.1,62.2,63.1,63.2,64.3,65,65.3,66.1,66.3,66.3-1,67.1,67.3,68.1,69.1,69.3,70.1,71.1,71.3,72.3,73.1,73.2,73.3,74.1,74.2,75.1,75.2,76.1,76.2,76.3,77.1,77.3,78.1,78.1-1,79.1,79.1-1,79.1-2,79.1-3,79.1-4,79.3,80.1,80.1-1,80.3,82.1,83.1,83.3,84.3,85.1,85.2,85.3,86.1,87.3,89.3,90.3,91.3; 1.3392%-об.см.02.1,02.2,03.1,04.2,05.3,06.1,07.2,08.2,09.2,10.2,11.2,12.2,13.1,14.2,15.2,32.1,32.2; 1.07136%-об.см.16.1,17.1,18.2,19.3,20.3,21.1,22.2,23.2,24.2,25.2,26.2,27.2,28.1,29.2,30.2,31.2; 2.87928%-об.см.35.2,35.3,36.1,37.1,38.1,39.1,40.1; 2.11147%-об.см.92.1 | 56.702 | 52.983                                                                                                                                                                                                        18.200 | 14.598                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | - | 124.283                                                                                                    17840
коэффициент перехода к трудоемкости для дополнительных расходов при производстве работ в зимнее время  0.57
Подпункт 30.1   Инструкции | Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от доп.временных 0.8*1.2*0.93*2.58% | 0.024 | 0.012                                                                                                                                                                                                        0.005 | 0.010                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | - | 0.046                                                                                                    6
Подпункт 30.2   Инструкции | Средства, связанные с отчислением на социальное страхование 34% | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 1894.815 | 1894.815                                                                                                    -
Подпункт 30.3   Инструкции | Средства, связанные с  подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика на разработку ПСД 29.7% | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 1655.177 | 1655.177                                                                                                    -
Подпункт 30.10 Инструкции | Средства, связанные с  подготовкой  объекта к приемке в эксплуатацию 0.306% | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 139.322 | 139.322                                                                                                    -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 56.726 | 52.995                                                                                                                                                                                                        18.205 | 14.608                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 3689.314 | 3813.643                                                                                                    17846
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 4691.266 | 4323.870                                                                                                                                                                                                        1062.259 | 26352.853                                                                                                                                                                                                        2520.897 | 3902.997                                                                                                    3161.570 | 71537.358                                                                                                                                                                                                        1430.747 | 4390.105 | 122311.663                                                                                                    607386
| Возвратные суммы | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | - | 199.935                                                                                                    -
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА
Подпункт 31.2     Инструкции | Средства на осуществление авторского надзора 0.2% | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 89.907 | 89.907                                                                                                    -
Подпункт 31.6     Инструкции | Средства на целевые отчисления,производимые заказчиками, застройщиками на финансир. инспекций Департамента контроля и надзора за стр-вом по обл. и г.Минску,спец.инспекции Департамента контроля и надзора за стр-вом Гос.комититета по станд.РБ 0.28% | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 135.810 | 135.810                                                                                                    -
Подпункт 31.7     Инструкции | Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве 0.09% | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 44.186 | 44.186                                                                                                    -
Подпункт 31.3     Инструкции | Средства на  ПР  (стадия А ) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 2240.365 | 2240.365                                                                                                    -
Подпункт 31.4     Инструкции | Средства на проведение экспертизы (по договору)(стадия А ) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 31.400 | 31.400                                                                                                    -
Подпункт 31.3     Инструкции | Средства на ПР (пересчет сметной документации  стадия А) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 21.558 | 21.558                                                                                                    -
Подпункт 31.4     Инструкции | Средства на проведение экспертизы (пересчет сметной документации стадия А ) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 4.218 | 4.218                                                                                                    -
Подпункт 31.3     Инструкции | Средства на ПР   (внесение изменений в АП) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 11.636 | 11.636                                                                                                    -
Подпункт 31.4     Инструкции | Средства на проведение экспертизы (внесение изменений сметной документации стадия А) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 2.715 | 2.715                                                                                                    -
Подпункт 31.3     Инструкции | Средства на  ПР (стадия С) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 1624.710 | 1624.710                                                                                                    -
Подпункт 31.4     Инструкции | Средства на проведение экспертизы (стадия С)  (по договору) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 35.407 | 35.407                                                                                                    -
Подпункт 31.3     Инструкции | Средства на ПР (корректировка стадия С ) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 14.808 | 14.808                                                                                                    -
Подпункт 31.4     Инструкции | Средства на проведение экспертизы (корректировка стадия С) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 3.191 | 3.191                                                                                                    -
Подпункт 31.3     Инструкции | Изыскательские работы (СП) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 139.433 | 139.433                                                                                                    -
Подпункт 31.3     Инструкции | Изыскательские работы (АП) | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 55.266 | 55.266                                                                                                    -
Подпункт 31.3     Инструкции | Технические требования | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 129.118 | 129.118                                                                                                    -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 4583.728 | 4583.728                                                                                                    -
| в т.ч. ПИР и эксп. без налогов | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 4313.825 | 4313.825                                                                                                    -
ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ КАДРОВ
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ  11 | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | - | -                                                                                                    -
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ  1-11 | 4691.266 | 4323.870                                                                                                                                                                                                        1062.259 | 26352.853                                                                                                                                                                                                        2520.897 | 3902.997                                                                                                    3161.570 | 71537.358                                                                                                                                                                                                        1430.747 | 8973.833 | 126895.391                                                                                                    607386
Подпункт 33.1  Инструкции | Средства на непредвиденные работы и затраты 4% | 187.651 | 172.955                                                                                                                                                                                                        42.490 | 1054.114                                                                                                                                                                                                        100.836 | 156.120                                                                                                    126.463 | 2861.494                                                                                                                                                                                                        57.230 | 358.953 | 5075.816                                                                                                    24295
| ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат | 4878.917 | 4496.825                                                                                                                                                                                                        1104.749 | 27406.967                                                                                                                                                                                                        2621.733 | 4059.117                                                                                                    3288.033 | 74398.852                                                                                                                                                                                                        1487.977 | 9332.786 | 131971.207                                                                                                    631681
| Итого на дату разработки сметной документации | 4878.917 | 4496.825                                                                                                                                                                                                        1104.749 | 27406.967                                                                                                                                                                                                        2621.733 | 4059.117                                                                                                    3288.033 | 74398.852                                                                                                                                                                                                        1487.977 | 9332.786 | 131971.207                                                                                                    631681
Подпункт 33.3.1 Инструкции | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала строительства | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 8793.766 | 8793.766                                                                                                    -
| Итого на дату начала строительства | 4878.917 | 4496.825                                                                                                                                                                                                        1104.749 | 27406.967                                                                                                                                                                                                        2621.733 | 4059.117                                                                                                    3288.033 | 74398.852                                                                                                                                                                                                        1487.977 | 18126.552 | 140764.973                                                                                                    631681
Подпункт 33.3.2 Инструкции | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 11132.480 | 11132.480                                                                                                    -
| в том числе возратные суммы | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | - | 94.329                                                                                                    -
| ИТОГО по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве | 4878.917 | 4496.825                                                                                                                                                                                                        1104.749 | 27406.967                                                                                                                                                                                                        2621.733 | 4059.117                                                                                                    3288.033 | 74398.852                                                                                                                                                                                                        1487.977 | 29259.032 | 151897.453                                                                                                    631681
| НДС 20% | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 30368.175 | 30368.175                                                                                                    -
Подпункт 33.2  Инструкции | Налоги и отчисления в соответствии с законодательством | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | 30368.175 | 30368.175                                                                                                    -
| ИТОГО по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве | 4878.917 | 4496.825                                                                                                                                                                                                        1104.749 | 27406.967                                                                                                                                                                                                        2621.733 | 4059.117                                                                                                    3288.033 | 74398.852                                                                                                                                                                                                        1487.977 | 59627.207 | 182265.628                                                                                                    631681
Подпункт 34.1  Инструкции | Возвратные суммы | - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                                                                                                                        - | -                                                                                                    - | -                                                                                                                                                                                                        - | - | 294.264                                                                                                    -
| Всего по сводному сметному расчету | 4878.917 | 4496.825                                                                                                                                                                                                        1104.749 | 27406.967                                                                                                                                                                                                        2621.733 | 4059.117                                                                                                    3288.033 | 74398.852                                                                                                                                                                                                        1487.977 | 59627.207 | 182265.628                                                                                                    631681

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ | | А.М.ОРЛОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | | П.В.СКОРОМНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | | Л.Н.ЛИХАЦКАЯ